Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска»  за 2014 год

1. Результаты реализации Программы, достигнутые  в 2014 году на основании индикаторов

Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить  деятельность системы наружного освещения города: 
- уровень работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах  доведен до 96,4 %; 
- уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах доведен до 62,2 %. 
Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы за 2014 год
Наименование  
   целевого    
  индикатора   	 Единица 
измерения	        Значение целевого индикатора        	
		Утверждено
в целевой 
программе 	Достигнуто	Отклонение от
утвержденного
  значения   	 % исполнения	
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	%	94	 96,4	+2	102,6	
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах    	%	62	62,2	+ 0,2	100,3	
Количество установленных светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	шт.	150	221	+ 71	147,3	
Количество установленных внутридворовых светильников	шт.	75	55	-28	73,3	
Количество энергосберегающих светильников ЖКУ на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	%	89	64	-25	71,9	

Уровень количества работающих  светильников  на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения:

Год	Общее количество светильников, шт.	Работающих светильников, шт.	Установлено светильников, шт.	% отношение работающих светильников к общему количеству	
2014 (по Программе)	2 661	2 502	150	94 	
2014 (факт)	2 895	2 790	221	96,4 	

Уровень количества работающих светильников во внутридворовых территориях:

Год	Общее количество светильников, шт.	Работающих светильников, шт.	Установлено светильников, шт.	% отношение работающих светильников к общему количеству	
2014 (по Программе)	1 011	630	75	62 	
2014 (факт)	982	610	55	62,2 	

По данным МП «Горэлектросети» уровень освещенности в городе составляет:
-  магистральных улиц – 96,4 %,
- второстепенных улиц – 92,3 %. 
Всего были установлены 352 светильника, из них: заменены 186 изношенных светильников на новые – энергосберегающие, установлено новых – 55 шт. на внутридворовых территориях. По улицам города дополнительно  установлено 221 штук светильников и  117 световых декоративных  консолей.
Общее количество светильников на магистральных улицах и внутридворовой территории города 3 877. Энергосберегающих светильников ЖКУ на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения 64 %,  что меньше планируемого значения (89%). В связи с удовлетворительной работоспособностью устаревших по модификации светильников, замена которых перенесена на 2015 год, в рамках выполнения мероприятий по установке светильников по программе было выполнено работ меньше, чем запланировано.
В 2014 году проводилась реконструкция наружного освещения на следующих участках: 
1. Реконструкция кабельной линии 10 кВ ГПП-3 - РП-405 для повышения надежности электроснабжения потребителей микрорайонов 38, 39, 40, 40а – заменено 590 м кабеля на напряжение 10 кВ от ГПП-3 "Белкино" до РП-405 в районе пересечения пр. Маркса и пр. Ленина.
2. Реконструкция наружного освещения ул. Менделеева на участке от ул. Горького до проходной №2 ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» - демонтировано 23 ж/б опоры, 26 светильников. Установлено 23 ж/б опоры СКЦ11-2,5; 27 светильников ЖКУ16-150, смонтировано 1350 провода СИП4 4х25 мм2.
3. Реконструкция наружного освещения, установка и подключение световой иллюминации на опорах наружного освещения по ул. Московской – установлено 53 светильника ЖКУ15-150, 3 опоры СКЦ11-2,5; смонтировано 1150 м провода СИП4 4х25 мм2; переставлены и выровнены существующие ж/б опоры, смонтировано 13 световых консолей "Атом", 1060 м провода СИП4 4х16 мм2, демонтировано 25 ж/б опор.
4. Построена линия наружного освещения и  установлена световая иллюминация на четной стороне ул. Гагарина – установлено 34 светильника ЖКУ16-150,  27 светильников ЖКУ16-250, 46 ж/б опор СКЦ11-2,5; смонтировано 1710 м провода СИП4 4х25 мм2, установлено 19  световых консолей "Космическая одиссея" и 1710 м провода СИП4 4х16 мм2.
5. Построена линия наружного освещения, установлена и подключена световая иллюминация на опорах наружного освещения по ул. Белкинской на участке от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Борисоглебской – проложен кабель: АСБл-1 4х50 мм2 - 150 м, АПвБбШв-1 4х16 мм2 - 110 м, установлено 43 ж/б опоры СКЦ11-2,5, 55 светодиодных светильников, 3 торшера со светильниками, смонтировано 1500 м провода СИП4 4х25 мм2. Смонтирована световая иллюминация: 19 световых консолей "Поэзия", провод СИП4 4х16 мм2 - 1500м. Демонтировано: 5 торшеров, 5 ж/б опор, 10 светильников, 2 металлические опоры со светодиодными светильниками.
6. Реконструкция наружного освещения ул. Ляшенко – демонтировано 10 ж/б опор. Установлено 11 ж/б опор СКЦ11-2,5; 2 светильника ЖКУ16-150, 30м провода СИП4 4х25 мм2.
7. Реконструкция наружного освещения трех пешеходных переходов через пр.Маркса – демонтировано 6 ж/б опор, 9 светильников. Установлено 11 ж/б опор СКЦ11-2,5; 20 светильников ЖКУ16-250, смонтировано 410 м провода СИП4 4х25 мм2.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Для повышением уровня безопасности движения транспортных средств и необходимостью освещения пешеходных переходов по данным ОГИБДД г.Обнинска произведена смена приоритетности и первоочередности мероприятий, а именно: 
- ул. Московская, пр. Ленина, ул. Ляшенко, ул. Менделеева, ул. Гагарина, ул. Белкинская, исключены мероприятия по освещению ул.Садовая, ул.Пирогова, ул. Красных Зорь;
- реконструкция освещения  пешеходных переходов (пр. Ленина, пр. Маркса, ул. Энгельса).
При этом направлено меньше средств на реконструкцию освещения на внутидворовых территориях. Реконструкция освещения внутриквартальных территорий проведена в объеме выделенных из бюджета средств. Кроме того, средства областного бюджета – грант по конкурсу «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» не реконструкцию сетей освещения не поступали.  

3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

В 2014 году по Программе предусмотрено на реализацию мероприятий    36 000 тыс. рублей, из них из  средств  бюджета города 33 000 тыс. рублей, областного бюджета – 3 000 тыс. рублей. Фактически выделено из средств бюджета города –     33 000 тыс. рублей,  освоено  - 30 732,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета не выделялись. 

Информация по выполнению мероприятий Программы:

Наименование мероприятия	Предусмотрено по Программе, тыс. рублей	Выделено из бюджета города, тыс. рублей	Освоено, тыс. рублей	% исполнения 	
1.1 Содержание  объектов уличного освещения	11 999	11 999	11 999	100,0	
1.2 Оплата  электроэнергии	11 358	11 358	11 358	100,0	
Итого по 1 разделу	23 357	23 357	23 357	100,0	
2.1 Реконструкция сетей уличного освещения   (ул.Московская, ул.Гагарина, ул.Ляшенко, ул.Менделеева, пр.Ленина, ул.Белкинская) в т.ч.
реконструкция освещения  пешеходных переходов (пр. Ленина, пр.Маркса, ул. Энгельса)	7 800 - местный бюджет

3 000 – областной бюджет	7 800 – местный бюджет 

- 
	
7 375,7

-
	94,6

 -	
2.2 Реконструкция внутридворового освещения 51 мкр., 52 мкр.	1 843	1 843	-	-	
Итого по 2 разделу:
Местный бюджет	9 643	9 643	7 375,7	76,5	
Областной бюджет	3000	-	-	-	
 Итого по Программе	36 000	33 000	30 732,7	93,1	

Не проведены запланированные мероприятия по реконструкции внутридворового освещения 51 мкр., 52 мкр. в связи с недостаточностью запланированных в бюджете средств. Выполненные работы по реконструкции наружного освещения по ул. Гагарина не оплачены  в связи недофинансированием из средств областного бюджета (грант).
 
4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Было внесено 4 изменения.
1. Постановлением от 24.02.2014 № 252-п  к исполнителям муниципальной программы добавлено муниципальное предприятие МП «Горэлектросети», для выполнения мероприятий силами МП «Горэлектросети».
2. Постановлением от 27.06.2014 № 1115-п  бюджет программы  уменьшен с 37 879 тыс. рублей до 33 000 тыс. рублей на основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 N 01-50 "О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.03.2014 N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59). Финансирование сокращено по мероприятию «Реконструкция внутридворового освещения 51 мкр., 52 мкр.»  на 2014 год с 3 200 тыс. рублей изменено на 1843 тыс. рублей, общая сумма на реконструкцию изменена соответственно с 11 000 тыс. рублей на 9 643 тыс. рублей. 
3. Постановлением от 01.10.2014 № 1840-п  в объемы финансирования программы добавлены  средства областного бюджета в сумме 3000 тыс. рублей на реконструкцию сетей уличного освещения по ул. Московская, ул. Гагарина, ул. Менделеева, ул. Белкинская. Общий бюджет программы на 2014 год составил 36 000 тыс. рублей.
4. Постановлением от 26.12.2014  № 2508-п  на основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 N 01-50 "О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.03.2014 N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59, от 28.10.2014 № 03-61, от 23.12.2014 № 01-64) финансирование средств перенесено с мероприятий Программы по «Реконструкция внутридворового освещения 51 мкр., 52 мкр.» и добавлены средства на мероприятия «Содержание  объектов уличного освещения» в  размере 1357 тыс. рублей. 

5.	Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
Наименование  
   целевого    
  индикатора   	 Единица 
измерения	        Значение целевого индикатора        	
		Утверждено
в целевой 
программе 	Достигнуто	 Оценка 
в баллах	
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	%	94	96,4	+1	
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах    	%	62	62,2	+1	
Количество установленных светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	шт.	150	189	+1	
Количество установленных внутридворовых светильников	шт.	75	55	-1	
Количество энергосберегающих светильников ЖКУ на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	%	89	64	-1	
Итоговая       
сводная оценка 	X	X	X	+1	

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства						В.В.Лежнин

Исп. Пинчугина Ю.В.
395-84-34